문서번호	시설과-3106
결재일자	2013.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	경영지원부장		역사박물관장
도경환	나용제	김광식		06/25 강홍빈
협 조

『박물관 광대역 자가정보통신망 구축 공사』 설계변경(정산) 검토 보고

2013. 6.

서울역사박물관

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

공사 설계변경(정산) 검토보고

우리박물관에서 공사발주 시행중인『박물관 광대역 자가정보통신망 구축 공사』추진중 현장여건에 의한 물량조정 등 설계변경 사유가 발생하였기에 아래와 같이 검토하여 정산(내역변경) 조치하고 자 함.

□ 관련근거

○ 시설과-2062호('13.05.01)[박물관 광대역 자가정보통신망 구축공사 시행]

○ 시설과-1818호('13.04.18)[박물관 광대역 자가정보통신망 구축 계획]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역사박물관 광대역 자가정보통신망 구축공사

○ 공사기간 : 2013. 05. 28 ~ 2013. 06. 26

○ 계 약 자 : 태경이엘피(주)  대표자  김평석

○ 계약금액 : ￦39,400,190원

○ 공사개요

- 광케이블 포설(SM 24C, 180M) 1식

- 광전송(네트워크)장비 설치 1식

□ 설계변경 사유(정산사유)

○ 현장여건에 따른 공종별 물량 조정

○ 당 현장 산재보험, 고용보험 미가입에 따른 보험료 감액 처리

□ 공종별 물량조정 내용

① 굴착 및 복구 길이 (107m ⇒ 93m) 물량조정 : 직선 굴착

- 사리도 굴착 및 복구(화단, 흙) 92m ⇒ 사리도 굴착 및 복구(화단, 흙) 27m 물량조정

•화단 식생 보호을 위하여 굴착 공정 조정

- 보도 굴착 및 복구15m ⇒ 보도 굴착 및 복구 66m 물량조정

② 전선관 설치 물량조정

- PE관(28mm) 및 ELP 전선관(80mm) 물량조정

- 아연도금 강제전선관, C찬넬, C찬넬크람프 설치제외(설치 불필요)

- 풀 박스 (300×300×150) 설치제외(설치 불필요)

③ 기타 부속자재 물량조정

□ 세부 설계변경 내용

구 분	공 종	설 계 변 경 내 용		공 사 비 (천원)
		당 초	변 경
설로포설 공 사	굴착 및 복구	사리도 굴착 및 복구 (화단, 흙) 92m 보도 굴착 및 복구 15m	사리도 굴착 및 복구 (화단, 흙) 27m 보도 굴착 및 복구 66m	감)515
	PE 전선관	PE관(28mm) 218m ELP(80mm) 107m	PE관(28mm) 222m ELP(80mm) 93m	감)70
	강제 전선관	안연도금(28mm) 6m 풀 박스 3개 C찬넬, C찬넬크람프	설치제외(설치 불필요)	감)363
	기타 부속자재	치수블럭 2개	치수블럭 4개	증)10
제 경 비	각 종	간접노무비외 5종	간접노무비외 5종	감)847
합 계			(내역변경)	감)1,785

□ 공사비 변경내용

○ 도급비 : 감1,785천원 (도급비 : 37,615천원)

※ 내역변경 시행(공종별 물량조정)

□ 조치의견

○ 상기 변경내용과 같이 설계변경(물량조정 내역변경) 및 정산 시행하여

차질없이 공사 마무리하여 준공 처리코 자 함.

첨부 : 설계변경 내역서 1부. 끝.