투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 통보)

□ 업무지시현장 :  월드컵대교건설공사 주식회사포스코엔지니어링

□ 작 성 일 자 : 2014-12-17 00:12:00

□ 지 시 내 용:

1. 아래 실정보고에 대하여 승인하니 정산, 설계변경등 감리업무추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 수상구간 P11, P12 자재 및 폐콘트리트 운반비 : 2014-409호

나. 분류하수관 보호공 F구간 선형변경 : 2014-411호

다. 북단IC 강변북로 가시설 설치 : 2014-412호

라. 북단IC 분류하수관 보호공 말뚝공사 정산 : 2014-413호

마. 북단IC 매립폐기물 처리 보고 : 2014-408호

2. 월드컵감리 2014-405호(2014.12.3.)로 제출한 2014.12~2015.2(3개월) 휴일작업요청에 대하여 승인하니 감리원은 반드시 상주하여 시공 및 안전관리에 만전을 기하기 바랍니다.  끝.

주무관							최진우			토목총괄과장					12/17 김영수
협조자
시행			토목부-25123									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 별관2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2542						/전송			02-3708-2599					/	cjw1116@seoul.go.kr												/	대시민공개