문서번호	정수과-4500
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
서홍교	12/17 김영배

정수시설 청소용역 추진사항 보고

('14.9.1~12.15)

2014.12

암사아리수정수센터

(정수과)

정수처리시설 청소 및 준설용역 추진현황 보고

('14.9.1~12.15)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 정수처리시설 청소 및 준설용역

○ 용역기간 : 2014.03.19. ~ 2014.12.26.

○ 용 역 비 : 금158,400,000원

○ 용역업체 : 미림개발㈜[대표 - 지장용, 소재지 - 서울시 종로구]

○ 청소물량 및 횟수

- 정수지 52,522㎡, 응집·침전지, 여과지 193,354㎡, 토사 준설 133㎥ 등

- 정수지, 여과지, 회수조 각 년 1회, 농축조 년 2회, 응집·침전지 년 1.2회

□ 정수시설 청소실적

○ 총괄현황

구분	응집·침전지						여과지					정수지		1차농축조		회수조
	#1					#2	#1				#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2
	계	1계열	2계열	3계열	4계열		1계열	2계열	3계열	4계열
대상	32	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16	4	2	2	2	2	2
계획	38					10	지당 1회					지당 1회		지당 2회		지당 1회
실적	38	10	10	8	10	11	15	16	16	16	16	4	2	-	3	2	-

○ 응집·침전지

구 분			1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지
#1	1계열	1회	'14.4.7	'14.6.13	'14.8.27	‘14.10.27	'14.9.18	'14.10.08	'14.11.26	'14.6.25
		2회					'14.12.10			'14.7.31
	2계열	1회	'14.4.1	'14.7.29	'14.7.9	'14.8.25	'14.10.06	'14.5.14	'14.10.21	'14.11.25
		2회	'14.8.14			'14.12.11
	3계열	1회	'14.11.18	'14.10.10	'14.12.01	'14.7.22	'14.12.09	'14.6.19	'14.8.20	'14.6.28
		2회
	4계열	1회	'14.4.2	'14.4.8	'14.6.10	'14.7.16	'14.8.4	'14.4.16	'14.4.25	'14.8.22
		2회	'14.11.24	'14.9.12
#2		1회	'14.4.21	'14.5.7	'14.5.19	'14.6.20	'14.8.26	'14.10.09	'14.4.11	'14.4.3
		2회			'14.8.19	'14.11.28			'14.7.11

※ 청소를 실시하였어도 고장난 침전지 우선으로 청소 실시

○ 여과지

- 1정수장 여과지 : ‘14.10월 ~ 12월 초 완료

· 1정수장 1계열 여과지 10지는 하부집수장치 공사 등의 사유로 청소 미실시

- 2정수장 여과지 : ‘14. 8월 완료

※ 1일에 여과지 4 ~ 5지 주벽 청소

○ 정수지

1정수장	1,2계열		3,4계열
	1지	2지	3지	4지
	'14.11.20	'14.10.31	'14.10.24	'14.10.16
2정수장	1지		2지
	'14.8.18		'14.5.29

○ 농축조 및 회수조

- 농축조 : 2정수장 농축조 2지 고장으로 3회 실시(‘14.7.18, 10.25, 11.27)

- 회수조 : 1정수장 회수조 1,2지 실시(‘14.12.15)

※ 고장 침전지 수리 등 청소물량 증가로 농축조 및 회수조 청소 물량 줄임

□ 향후계획

○ 청소추진 실적, 보험 등 각종 증빙서류 확인(미림개발)

○ ‘14년 정수처리시설 청소 최종보고 및 설계변경 추진

- 청소물량 변경, 각종 보험 등 변경사항 반영

○ 청소용역 준공 처리 : ‘14.12.26한

붙임 : 정수시설 청소 사진(‘14.9.1~12.15)