투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 및 준공기한 연기(2014년 건설폐기물 처리용역(연간단가))

1. 우리센터에서 시행하고 있는“2014년 건설폐기물 처리용역(연간단가)”에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

나. 용역기간 : 2014. 3. 18 ~ 2014. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜도요이디아이  대표 김상회

라. 변경사유 : 용역수량 증․감

마. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

바. 설계변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증․감	비 고
총용역비	35,721,000	52,613,000	증16,892,000
도 급 비	35,721,000	52,613,000	증16,892,000
이 설 비	-	-

사. 준공기한 연기

1) 당초 : 2014. 12. 31

2) 변경 : 2015.  2. 28

첨부  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 관련 보고서 1부.  끝.

주무관	김민호		주무관	강희석		시설팀장	권순회		물재생과장	김일운
난지물재생센터소장	12/17 代김웅남
협조자	관리과장	김웅남
시행	물재생과-4158	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8580	/		/	대시민공개