문서번호	도시계획과-9234
결재일자	2013.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도시계획과장	도시관리정책관		도시계획국장
정광재	한제현	류훈		06/26 이제원
협 조
	지구경관계획팀장		홍선기

- 공공건축가를 통한 고도지구내 주거모델 구상(삼흥연립) -

준공기한 연기 보고

2013. 6.

도시계획국

(도시계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 공공건축가를 통한 고도지구내 주거모델 구상(삼흥연립) -

준공기한 연기 보고

「공공건축가를 통한 고도지구내 주거모델 구상(삼흥연립)」기술용역과 관련, 다양한 주거모델 구상 및 주민분담금 경감방안 마련을 위해 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 공공건축가를 통한 고도지구내 주거모델 구상(삼흥연립)

○ 용역기관 : 건축사사무소 O.C.A 대표 임재용

○ 용 역 비 : 13,239,330원

○ 용역기간 : 2013. 4. 1 ～ 2013. 6. 29 (3개월)

○ 주요 과업내용

- 현황 조사 및 여건 분석 등

- 설계자의 컨셉[계획 취지나 개념(이론적 배경)] 제시

- 주거모델 구상안(건축물 계획) 제시

- 사업성 검토를 위한 데이터 제시

□ 준공기한 연기

○ 준공기한

- 당초 : 2013. 4. 1 ～ 2013.  6.  29 (3개월)

- 변경 : 2013. 4. 1 ～ 2013. 10.  29 (7개월)

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 연기사유

- 주거모델 구상(안)에 대한 주민설명회 및 중간보고회 실시 결과, 추가계획안 검토 등 의견이 제시되어 다양한 주거모델 구상 및 주민분담금 경감방안 마련을 위해 상당한 시일이 소요되어 기간연장 불가피

붙임 : 과업기간 연기요청서 1부.  끝.