설계변경 심의 의견서

대시민공개

1. 공사명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

신청부서명	시설관리과
작 성 자	함인석
제출년월일	2014. 12. 17

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2014. 12. 17(수) 15:40 ~ 16:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와

같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

시설관리과장

이계환

12/17

代송종범

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

담    당

주무관

함인석

함인석

타당함

설계변경(3차)사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

○ 공사규모 : 당초 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 780개소

변경 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 780개소

○ 공사기간 : 2014. 06. 23 ~ 2014. 12. 31(총부기기한 : 2015.6.30.일까지)

○ 도 급 비 : 당초 ￦1,077,873,600원(일십억칠천칠백팔십칠만삼천육백원)

변경 ￦1,077,873,600원(일십억칠천칠백팔십칠만삼천육백원)

○ 도 급 자 : (주)건설넷 대표 박정민

○ 계약금액조정 대상금액 : 계약금액 변동 없음

□ 설계변경 세부내용 및 사유

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 2항 및

공사계약 일반조건 제7절 나항

○ 계약물량 변경

- 물량증가 공종 : 굴삭기 0.4㎥(브레이카)누수,야 외 173개 공종

- 물량감소 공종 : 아스팔트 포장절단외 61개 공종

- 신규공종 발생 : K.P 이탈방지압륜접합외 62개 공종

- 신규자재 : 이경소켓(슬립인죠인트)외 11개 공종

□ 설계변경 금액내역

공 종	변경 내용		변경 사유	비 고
	당 초	변 경
계	1,077,873,600	1,077,873,600
토 공	256,739,571	241,262,390	- 공종별 물량 증감 신규공종 및 자재
부설공	136,162,719	175,773,948
구조물공	6,559,298	10,240,256
부대공	156,663,593	127,193,262
포장공	12,181,299	13,022,303
사급자재	66,731,242	68,495,454
기타	442,835,878	441,885,987

(단위 : 원)

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.