문서번호	세무과-28238
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		세외수입팀장	재정사업단장
조수정		양주춘	전결 12/17 백일헌
협조

2014년 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 부분준공(3차) 검사 결과 보고

재정사업단

(세외수입팀)

2014년 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 사업

부분 준공(3차) 검사 결과 보고

2014년도 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 용역 사업과 관련하여 부분 준공(3차) 검사를 실시하고 결과 보고함.

※ 근거 : 검사원지정요구(재무과-54162, 2014.12.9.)

Ⅰ				사업개요

❍ 사 업 명 : 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 용역

❍ 사업기간 : 2014. 3. 18. ~ 2015. 2. 28 (12개월)

❍ 계 약 자 : 사이텍스정보기술(주)

❍ 계약금액 : 399,840천원 (부가가치세 포함)

❍ 과업내용

- 세외수입종합징수시스템 추가개발 및 기능개선

- 세외수입종합징수시스템 응용SW 운영 및 유지보수

- 세외수입종합징수시스템 상용SW 유지보수

Ⅱ				부분 준공 내역

❍ 대상기간 : 2014. 9. 1 ~ 11. 30 (3개월)

(단위:천원)

구분		계약금액	1차	2차	금회 (3차)	비고
(부분)준공일자			´14. 6. 23	´14. 9. 15	’14.12.17	공정율 74.8%
(부분) 준공 금액	계	399,840	94,002	83,356	119,632
	추가개발 및 기능개선	66,413	10,646	-	36,276	금회 84.5FP (154.7FP)
	운영 및 유지보수	256,886	64,221	64,221	64,221
	상용SW 유지보수	76,541	19,135	19,135	19,135

【선급금 지급에 의한 사업비 지출 현황】                                  (단위:천원)

구분	계	선급금 (2014.3월)	1차 지출 (1차 준공)	2차지출 (2차 준공)	3차 지출 (금회)	비고
지출액	338,131	159,936	56,401	50,014	71,780
선금정산액			37,601	33,342	47,852
부분준공금			94,002	83,356	119,632

※선금정산액=선급금x(부분준공금/계약금액)

Ⅲ				검사(검수) 개요

❍ 검사(검수) 기간 : 2014. 12. 15  ~ 12. 17 (3일간)

❍ 검수자

- 근거 : 서울특별시 재무회계규칙 제111조에 의거

주관과 담당 사무관, 주관담당자 6급 이하 1명 지정

(용역 2억원 이상에 해당)

- 현장감독공무원 : 전산 6급 조수정 주무관

- 준공 검사자 : 세외수입팀장, 전산7급 남일진 주무관

❍ 검사(수) 방법 : 현장감독공무원이 1차 확인후 준공검사자가 최종 검사

❍ 검사(수) 내용 : 과업지시내용과 사업수행계획서 기준의 이행 실적 검사

1) 과업 이행 실적 검사

검사분야	주요검사내용	비고
추가개발 및 기능개선	- 기능점수(FP) 산정 (실적/계획) 개발 성과물(산출물) 검토
응용SW 운영 및 유지보수	- 추진 실적 검토 · 사용자 문의 응대 · 프로그램 보완 사항 · 인프라 개선에 따른 기술 지원
상용SW 유지보수	- SW별 제조사 정기점검 이행여부 - 자체 정기점검 이행 여부

- 각 분야별 사업수행계획서에 정의된 계획을 기준으로 산정

2) 사업관리 분야 검사

- 월별 인력투입 실적

- 사업 공정 단계에 따른 산출물 작성 여부 검사

Ⅳ				검사 결과

1) 과업 이행 실적 검사

과업 이행 내용

검사결과

비고

추가개발

및 기능개선

❍ 청백e(통합 상시모니터링-행자부) 시스템 연계

- 기능점수 산정 결과 : 계획보다 개발 범위 증가

(계획 :  34.1FP, 실적  50.3FP)

- 운영개시일 : 2014. 9. 22

❍ 환급액 시뮬레이션 프로그램 개발

- 기능점수 산정 결과 : 계획보다 개발 범위 증가

(계획 : 24.5FP, 실적 32.5FP)

- 운영 개시일 : 2014.11.17

❍ 세외수입 통합 징수통계시스템 구축

- 기능점수 산정 결과 : 계획보다 개발 범위 증가

(계획 :   25.9FP, 실적  27.1FP)

- 운영개시일 : 2014. 11. 17

완료

[별첨]

세부추진실적서

응용SW

운영 및

유지보수

❍ 사용자 요구사항에 의한 프로그램 개선 및 응대

구분	단순응대	프로그램 개선
9월	276건	8건
10월	295건	11건
11월	490건	13건
총계	1,061건	32건

❍ 세외수입 인프라 개선 사업 지원

- 소스 검토 및 자료작성 : 12회

- 성능 및 단위테스트 기술 지원 : 11회

- 통합 테스트 실시 및 기술지원 : 4회

- 성능이슈검토회 및 업무협의 참석 : 20회

완료

상용SW

유지보수

❍ SW별 제조사 정기점검 이행

- 월 정기점검 SW(5종) 3회, 분기점검 SW(1종) 1회

❍ 자체 월 정기점검 : 상용SW 11종

❍ 연계 배치 업무 일일 점검 확인 : 14종

완료

2) 사업관리 분야 검사

❍ 투입인력 검사 결과 : 적정

구분	9월	10월	11월	비고
계획	5.0	5.0	5.0	단위:M/M
실적	5.0	5.0	5.0

❍ 사업 공정 단계에 따른 산출물 작성 여부 검사

단계	산출물명	작성여부	비고
정기보고	주간업무보고서	완료	매주 1회 (총13회)
	월간업무보고서	완료	매월 1회 : 총 3회
품질관리	품질관리보고서	완료	품질관리수행(9.24)

※ 산출물  :  정보화사업관리시스템 게시

Ⅴ				별 첨

1. 부분 준공(3차) 세부 과업 이행 내용 및 검사 결과서 1부.

2. 세부 추진 실적(과업이행분야) 1부.