문서번호	기전과-11636
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
김태수		정윤식	12/17 이승진
협조

『북악터널 젯트팬 보강공사』 실정보고 검토 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

북부도로사업소

기전과

『북악터널 젯트팬 보강공사』

실정보고 검토 및 조치계획 보고

북악터널 젯트팬 보강공사 추진중 시공사(주-가나오엠)로부터 현장실정에 따른 설계변경 요청이 접수되어 이를 검토하고 조치 계획을 보고함

▢ 관련근거

○ 2014. 12. 09 북악터널 젯트팬 보강공사 계약체결

○ 2014. 12. 16  북악터널 젯트팬 보강공사 설계변경 요청건

▢ 공사 개요

○ 공 사 명 : 북악터널 젯트팬 보강공사

○ 공사금액 : 120,662,400원

○ 공사기간 : 2014. 12. 09 ~ 2015. 02. 28

○ 시공업체 : ㈜가나오엠   대표 홍중표

○ 공사위치 : 북악터널

▢ 현장 실정보고 내용 및 검토의견

항목	현 재 상 황 및 문 제 점	검토의견	변경금액 (증‧ 감)	비고
터널보강 그라우팅	- 콘크리트 타설의 구조적 문제로(콘크이트 침하,레이턴스,타설의 어려움등) 라이닝상부 배면 공동발생등 취약한 구조를 가지고 있음. -이러한 라이닝 상부구간에 천공을 시행함에 따라 라이닝 구조물의 추가보강이 필요하여 배면공동부 그라우팅을 시행	- 라이닝 상부 배면 공동 발생등 취약 구조로 라이닝 상부구간에 추가 보강 그라우팅 시행 - 터널공동그라우팅 당초 69㎥에서 99㎥ 증가	증 18,337,600원

▢ 변경 금액

구 분	변 경 전	변 경 후	증ㆍ감	비 고
공급가액	109,693,091	126,363,636	(증)16,670,545	-
부가가치세	10,969,309	12,636,364	(증)1,667,055	-
총공사비	120,662,400	139,000,000	(증)18,337,600	-

○ 설계변경 사유 및 가용예산

- 터널 라이닝 상부구간에 추가 그라우팅 보강이 필요하여 수정보완

하고자 설계 변경 필요

- 예산가용액 : 공사낙찰차액 사용 19백만원

▢ 검토 의견 및 조치사항

○ 시공사 설계변경 보고에 대해 검토한 결과 적합하여 위와 같이

추진토록 승인하고 낙찰차액  활용하여 설계변경을 추진코자 함

붙임 : 1.북악터널 젯트팬 보강공사 설계변경 요청 1부.

2.설계 변경내역서 1부. 끝.