투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	한강공원 이용안내시설 공사 계약변경 의뢰

1. 시설관리과-3547(2014.12.17.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과에서 추진하고 있는 한강공원 이용안내설 정비공사에 대하여 본부 방침 등에 의거하여 시공물량 및 준공기한을 아래와 같이 변경하고자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 이용안내시설 정비공사

나. 공사내용 : 공원진입판 정비 20개소, 공원안내시설 정비 230개소

종합안내표지판 신설 21개소 등

다. 공사기간 : 2014.5.23.~2014.12.19

라. 변경내용

1) 변경금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
총공사비	262,387,000	262,000,000	-387,000
도급비	249,387,000	262,000,000	12,613,000
이전비	13,000,000	0	-13,000

2) 준공기한 연기

당 초	변 경
2014.5.23.~ 2014.12.19	2014.5.23.~ 2015.1.31

마. 변경사유

- 한강공원 진입 안내표지판 및 종합안내표지판 등 시공물량 변경

- 겨울철 현장설치에 따른 공기 부족 등

따로붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	안덕용		주무관	유충현		시설관리과장	12/17 박희철
협조자
시행	시설관리과-3557	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 (강변북로 257)	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	ahndy@seoul.go.kr	/	부분공개(5)