문서번호	시설과-7554
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정연준		김인규	12/17 이규상
협 조

중랑천 횡단 상수도관 이설공사

한전인입비 반영 보고

2014. 12

시 설 안 전 부

(시 설 과)

중랑천 횡단 상수도관 이설공사

한전인입비 반영 보고

발주시 계약의뢰 내역에는 도급금액에 포함되어 있었으나, 재무과 기초금액 산정시 제외된 한전인입비를 반영코자 보고드림

Ⅰ		공사개요

▢ 공 사 명 : 중랑천 횡단 상수도관 이설공사

▢ 공사개요 : 상수도관 신설 – D1350mm, L=125m

(세미쉴드 D1650mm, L=96m)

철거 – D1650mm, L=125m

▢ 도 급 비 : 1,894,765천원

▢ 공사기간 : 2014. 11. 05 ~ 2015. 07. 04

▢ 시 공 사 : 삼원플랜트컨설턴트(주)

▢ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		보고요지

- 당초 설계내역서 도급예정액에는 한전인입비가 포함되어 있으나, 공사입찰을 위한 기초금액 산정시 제외시킨 한전인입비를 반영코자 함

Ⅲ		검토내용

○ 계약 도급내역에 한전인입비가 포함되어야 하나 누락되어 있음.

○ 원활한 공사추진을 위해 설계시 계상된 금액으로 도급공사비에 반영하고

○ 추후 한전인입에 소요된 비용은 증빙자료(고지서)에 의하여 실비정산 조치

▢ 공사비 증․감현황                                  (단위 : 천원)

구 분	단위	수량	금 액			비고
			당 초	변 경	증․감
공급가액	식	1	1,722,514	1,722,514	-
부가세	식	1	172,251	172,251	-
한전인입비	식	1	-	41,475	41,475
도급액	식	1	1,894,765	1,936,240	41,475

▢ 설계변경근거

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)

공사의 이행중 설계서 내용이 불분명하거나 누락,오류 또는 모순되는 점이 있을 경우 및 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

Ⅳ		검토의견

○ 설계시 도급예정액에 포함되어 있었으나 계약도급액에 누락된 한전인입비를 도급공사비에 포함토록 하고

○ 공사의 시급성을 감안하여 우선 시공토록 업무 지시하고자 하며.

○ 우리 본부 계약금액조정 검토를 거쳐 설계변경 반영조치코자 함.

첨부 : 1. 책임사업관리기술자 보고. 1부.

2. 설계,계약내역서 1부.  끝.