함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(누수복구공사 - 1회)

1. 우리사업소에서 시행중인「2014년 양천, 강서,구로구 일대 긴급누수복구공사  (장기계속단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 양천, 강서, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가)

나. 공사기간 : 2014. 5. 12 ~ 2015. 6. 30

다. 도 급 자 : 상협건설,  대표 주 상 호

라. 설계변경사유 : 신규공종 및 물량 증 ․ 감 발생

마. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비(상수도관 누수복구)

상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(불용관정비)

바. 설계변경내역                                                       (단위 : 원)

구 분	총 부기금액		1차수 부기금액		2차수 부기금액		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
도급비	2,555,653,790	2,555,653,790	1,788,957,000	1,295,690,000	766,696,790	1,259,963,790

따로붙임  1. 설계변경계획(1회) 및 설계변경 심의위원회 개최결과 각 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 심의 결과서 및 합의서 1부.  끝.

주무관	박학중		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	12/17 이상래
협조자	주무관	손종백
시행	시설관리과-26580	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-4005	/전송	3146-4039	/	harkjung10@hanmail.net	/	대시민공개