문서번호	시설보수과-5262
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
금종융	김찬구	12/17 민승기
협 조

- 도림천4복개(우안) 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2014. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

- 도림천4복개(우안) 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

도림천4복개(우안) 정밀안전진단용역 추진과 관련 자문회의 결과 반영 등(추가 과업지시, 1,2련 재하시험)에 따른 용역수행업체로 부터 용역기한 연기 요청이 있어 검토하고 준공기한을 연기코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도림천4복개(우안) 정밀안전진단 용역

○ 용역기간 : 2014. 5. 2. ~ 2014. 12. 27.

○ 용 역 비 : 227,623,000원

○ 용 역 사 : ㈜한국국토안전연구원 외 1 대표 신 광 식

□ 보고내용

○ 근 거 : ㈜한국국토안전연구원 국안연-126호 (2014.12.16)

○ 준공기한 연기 사유

- 1차 자문회의시 외부전문가 공통요청사항인 1련,2련에 대한 재하시험 실시가 필요하다는 의견이 제출되어 추가 과업지시 실시함에 따라

- 정밀한 시설물 공용내하력 평가 및 내실있는 진단결과 보고서 작성을 위하여 용역기간을 2015. 2.10일까지 연장 필요

○ 준공기한 연기 요청사항

- 당 초 : 2014. 5. 2. ~ 2014. 12. 27.

- 변 경 : 2014. 5. 2. ~ 2015.  2. 10.

□ 조치의견

○ ㈜한국국토안전연구원 연기 요청사항에 대하여 검토한 바,

- 당초 계약내역에 미반영되어 있던 1련,2련에 대한 재하시험 실시에 따른 추가 과업지시 등으로 인해 (1차 자문회의시 외부전문가 요청사항) 조치결과 반영에 따른 공기 연장이 필요할 것으로 사료되어

- 내실있는 과업을 위하여 용역기간을 2015. 2.10일까지 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 준공기한 연기의뢰 ⇒ 관리단속과

- 준공기한 연기내용

∙ 당 초 : 2014. 5. 2. ~ 2014. 12. 27.

∙ 변 경 : 2014. 5. 2. ~ 2015.  2. 10.

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한 연기요청 관련 서류 1부.  끝.