문서번호	교통운영과-23815
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	12/17 강진동
협조
	주무관		김상범

『교통량측정용 차량검지기』

원인자 3차 작업기한 연장요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

교통운영과

(신호운영팀)

『교통량측정용 차량검지기』

원인자 3차 작업기한 연장요청 검토보고

교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가) 원인자 3차 작업기한

연장요청이 있어 아래와 검토하고 처리방안을 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 교통량측정용 차량검지기 원인자 3차 작업시행 보고

〔교통운영과-22579(2014.12.1.)〕

❍ 교통량측정용 차량검지기 원인자 3차 작업지시

〔교통운영과-22625(2014.12.2.)〕

❍  교통량측정용 차량검지기 원인자 3차 작업기한 연장요청 제출

〔대금 14-1216-01(2014.12.16.)〕

□ 공사개요

❍ 건    명 : 교통량측정용 차량검지기 원인자 3차 작업지시

❍ 공사장소 : 삼육대 외 2개 지점

❍ 작업내용 : 검지기 4각head 42기 신설 등

❍ 작업기간 : 2014.12.02.~2014.12.17.

□ 진행사항

연번	지점명	작업내용	진행사항	비고
1	삼육대입구	4각헤드 12기 신설, 리드인81m, 루프선282m 신설, 시험1개소, 측구밑배관1개소	공사 미완료
2	오류I.C	4각헤드 14기 신설, 리드인112m, 루프선420m 신설, 시험1개소, 측구밑배관1개소	공사 미완료
3	연희I.C	4각헤드 16기 신설, 리드인124m, 루프선472m 신설, 시험1개소, 측구밑배관1개소	공사완료

□ 연장사유

❍ 예상치 못한 폭설과 한파로 인하여 노면 커팅작업 및 실런트 양생의 어려움과

노면에 제설제가 고착되어 있어 실런트 충진시 파손 현상이 발생될 수 있어

작업 기간을 연장 요청 함.

□ 검토결과

❍ 제설제 고착으로 커팅작업 및 실런트 양생의 어려움과 충진시 실런트

파손현상을 감안하여  최상의 검지기를 설치하고자 작업기간을 연장을

승인하고자 함.

❍ 승인 연장기간 : 2014년 12월 18일~12월31일.

붙임 : 작업기간 연장요청 문서 1부.  끝.