투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(제1차)시행[2014년 하반기 교통사고 잦은곳 교통안전표지공사]

1. 기전과-11594호(2014.12.17)와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내 하반기 교통사고 잦은곳 개선을 위한 공사에 대해 설계변경(제1차) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 하반기 교통사고 잦은곳 교통안전표지공사

나. 공사기간 : 2014. 11. 24 ~ 2014. 12. 23

다. 시공업체 : 금산건설(주) 대표 김현중

라. 공사금액 : 금3,710,000원(금삼백칠십일만원)

마. 설계변경 내용

○설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	3,710,000	3,680,000	30,000	감
공 급 가 액	3,372,728	3,345,455	27,273	감
부가가치세	337,272	334,545	2,727	감

○설계변경사유 : 건강,연금,노인장기요양보험이 상기공사에는 미적용공사에 해당되어 공사비 감액발생에 따른 계약금액변경

바. 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전관리강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(401-01)

도시교통체계 및 소통개선, 교통안전관리강화, 교통사고잦은곳개선, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부. 끝.

주무관							강운규				기전과장					12/17 정윤식
협조자				주무관							박경우					관리단속과장							정수현
시행			기전과-11613										(						)		접수												(						)
우	142-060					서울 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소																/			http://www.seoul.go.kr
전화		944-5477							/전송			945-5074					/	wgkang@seoul.go.kr													/	부분공개(5)