투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경 시행에 따른 계약 의뢰(선사로~고덕지구간 도로확장공사 부지내 무연분묘 이장 용역)

1. 건국2014-099(2014.12.12.)호 및 건국2014-100(2014.12.12.)호 및 토목부-24989(2014.12.16.)호와 관련됩니다.

2. 우리 본부에서 시행중에 있는 “선사로 ~고덕지구간 도로확장공사 부지내 무연분묘 이장 용역”에 대하여 따로붙임과 같이 설계변경 시행에 따른 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 선사로 ~고덕지구간 도로확장공사 부지내 무연분묘 이장 용역

나. 용역규모

1) 봉분 무연묘 5기

2) 문화재 조사시 발굴 인골 13기

다. 용 역 비 : 금8,600,000원(금팔백육십만원)

라. 용역기간 : 2014.10. 2. ~ 2014.12.30.

마. 도 급 자 : ㈜건국공영

바. 설계변경 내역

(단위 : 천원)

구 분		용역비 변경 개요				비고
		당 초	변 경	증·감	사 유
변경	용역비	8,600	9,463	증)863	무연 봉분묘2기(2기합장) 추가 발견 및 문화재조사구간 인골 물량 증·감에 따른 설계변경

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 관련 공문  1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	최광무		토목부장	12/17 노우성
협조자	경리과장	허금도
시행	토목부-25077	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개