문서번호	설비부-1094
결재일자	2013.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	열빛총괄과장	설비부장	시설국장
신용휴	권오식	박기형	02/01 이광세

- 난지물재생센터 고도처리시설 설치사업 -

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013.  2.

도시기반시설본부

(설  비  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 난지물재생센터 고도처리시설 설치사업 -

준공기한 연기 검토 보고

우리본부에서 시행중인 『난지물재생센터 고도처리시설(분뇨탈취포함) 설치 사업』에 대한 준공기한 연기 검토 보고임.

검토근거

❍ 난고감 제2013-016호(2013.01.31) : 준공기한 연기검토 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 난지물재생센터 고도처리시설(분뇨탈취포함) 설치사업

❍ 규    모 : 고도처리시설개량 : 860,000㎥/일(MLE공법)

❍ 공사기간 : 총차 2009.07.30~2013.02.28(5차 2012.2.22~2013.02.28)

❍ 도 급 비 : 44,311백만원(5차 : 8,014백만원)

❍ 시 공 사 : (주)태영건설외 2개사

❍ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, 동부엔지니어링(주)

준공기한 연기 검토

❍ 공사 연기사유

- 총차 및 5차 공사가 2013.02.28 준공예정이나 총인(T-P)처리시설 기본/실시설계 심의 및 계약변경 등을 위한 절대공기 부족

- 고도처리시설공사 종합시운전(2013.02.28까지)에 따른 회계연도내 예산집행 불가로 공사의 연계성 유지를 위해 준공기한 연기

❍ 준공기한 변경내용

(단위 : 천원)

구 분			당 초	변 경	비 고
고도처리	총차	준공기한	2013.02.28	2013.04.30	2개월
		계약변경	44,311,560	44,311,560
	5차	준공기한	2013.02.28	2013.04.30	2개월
		계약변경	8,014,055	8,014,055

❍ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 원활한 사업추진과 공사의 연계성 유지를 위해 준공기한 연기가 필요하다고 판단되며,

❍ 계약금액 변경 없이 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

첨부  1. 준공기한 연기검토 보고 공문 1부.

2. 책임감리용역 준공기한 연기 보고 공문 1부. 끝.