문서번호	공원녹지정책과-1762
결재일자	2013.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원관리2팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
박나현	류연호	구아미	02/01 오해영

와우산 근린공원 정비사업 추진계획

푸른도시국

(공원녹지정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

(2013년 주민참여 예산 사업)

와우산 근린공원 정비사업 추진계획

추진근거 : 2013년도 주민참여예산 선정사업

추진부서 : 마포구 공원녹지과

사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례 및 동 운영계획(2012.5.25)

▸ 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 자치단체자본보조

사업개요 (재해없는 마을 와우근린공원(와우산) 정비계획 - 마포구청)

대상지: 마포구 창전동 2-231 와우산근린공원(와우산)

규    모 : 20,000㎡

사업기간 : 2013. 1. ~ 10.

사업비: 900,000천원(시비)

(단위 : 천원)

구 분	2013 예산	산출내역
계	900,000
설계	20,000	○시설설계비
공사	800,000	○기존시설 정비․보완 및 신규시설 설치 ○식재공사

사업내용

- 자투리공간 자연학습장 조성(210㎡) 및 노후체력단련장 정비(120㎡)

- 등산로 주변 휀스철거 및 생태복원(2,400m), 수목․초화류 식재

- 노후배수로(870m) 및 사면(1,800㎡) 정비, 군부대 정문 불량경관 개선

추진과정

① 기술용역 타당성 심사		② 설계용역 예산 교부요청		③ 설계용역 예산 교부
(마포구청⇒ 기술심사담당관)		(마포구청⇒ 공원녹지정책과)		(공원녹지청책과⇒ 마포구청)
④ 설계용역수행(마포구청)		⑤ 설계용역보고		⑥ 공원정비 사업비 교부요청
- 주민의견수렴 - 조성계획변경(필요시)		(마포구청⇒ 공원녹지정책과)		(마포구청⇒ 공원녹지정책과) ※ 계약심사 필
⑦ 공원정비 사업비 교부		⑧ 공사시행(마포구청)		⑨ 정비사업 결과제출
(공원녹지정책과⇒ 마포구청)				(마포구청⇒ 공원녹지정책과)

추진일정

2013. 1. ~ 2. : 사업계획 수립 및 시달, 기본 및 실시설계 용역착수

- 기술용역타당성 심의(사업부서→기술심사담당관)

- 설계비 재배정(시→마포구청)

2013. 2. ~ 3. : 주민, 학교, 군부대와 사업설명회 개최(주민의견수렴)

2013. 3.      : 설계용역보고 및 계약심사

2013. 3. ~ 10. : 공사발주 및 준공 (정비사업 시행 및 완료)

소관부서별 추진업무

구 분	추 진 업 무
시 공원녹지정책과	▸ 사업계획 수립 ▸ 예산 재배정 ▸ 설계용역보고 및 공사추진사항 점검
마포구 공원녹지과	▸ 기본 및 실시설계용역, 사업설명회 및 주민의견수렴 등 ▸ 설계용역보고․계약심사, 공원조성계획(변경) 등 관련절차 이행 ▸ 정비공사 시행(착공 및 준공보고)

붙 임 : 재해없는 마을 와우근린공원(와우산) 정비계획(마포구공원녹지과-697호, 2013.1.15) 1부.  끝.