문서번호	도시철도설비부-11781
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
민종태		김영하	12/18 정찬웅
협 조
	차량과장			황영일

9호선 2단계 영업시운전 대비

9호선 1,2단계 신호분야 연계시험 결과 보고

2014. 12.

도시철도설비부

(신  호  과)

9호선 2단계 영업시운전 대비

9호선 1,2단계 신호분야 연계시험 결과 보고

9호선 2단계 영업시운전 대비 1,2단계 신호분야(신호시스템, 신호관제) 시스템 연결 작업 및 연계 시험을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		시험 개요

○ 일시: 2014.12.13. ∼ 15.(3일) 18:00~익일 06:00

○ 장소: 9호선 1,2단계 신호기계실 및 개화차량기지 종합관제실

○ 내용: 영업시운전 대비 9호선 1,2 단계 시스템 업데이트 및 연계 동작 시험

○ 참석: 21명

* 본부, 감리단, 1단계운영사, 2단계운영사, 현대정보기술, 포스코엔지니어링, 기관사

Ⅱ		시험 결과

○ 신호기계실 연계 시험: 정상 작동

* 1,2단계 시스템 연계 후 유지(원복하지 않음)→ 2단계 운영사 신호기계실 근무 및 관리

○ 종합관제실 연계 시험: 정상 작동

* 1,2단계용 통합 소프트웨어 시험 후 원상 복귀→ 영업시운전 개시 전 변경

○ 신호분야 영업시운전 정상 추진 가능

[시험 전경]

[관제 연계시험]

[신호기계실 연계작업]

Ⅲ		세부 시험 내용

□ 신호기계실 연계 시험

○ 일시: ‘14.12.13. ∼ 14.(2일)

○ 장소: 9호선 1,2단계 신호기계실(12개소)

○ 내용: 신호시스템 업데이트 및 연계동작 확인

- 신호기계실 ATC 데이터 수정(925역) 및 광통신 연결

- 연동장치 롬(ROM) 교체(1단계 신호기계실 10개소)

○ 결과

- 1,2단계 신호기계실 연계 동작 정상 확인

□ 신호관제실 연계 시험

○ 일시 : ‘14.12.14. ∼ 15.(2일)

○ 장소 : 9호선 1,2단계 전구간

○ 내용: 열차종합제어장치(TTC*) 소프트웨어 동작 및 자동운전 시험

* Total Traffic Control

- 1,2단계 통합 열차종합제어장치(TTC) 이용 연동검사

- 열차(3편성) 이용 자동 운전 시험(급행, 완행)

○ 결과 :

- 열차종합제어장치(TTC) 정상 동작 확인

Ⅳ		향후 계획

○ ‘14.12.20.  1,2단계 통합용 소프트웨어 기존 관제 서버에 설치 및 운용(영업시운전 개시).   끝.