함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(사업장폐기물 처리용역 장기계속 연간단가)

우리정수센터 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(계약번호 20140*******01)과 관련하여 다음과 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 용 역 명 : 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(장기계속 연간단가)

나. 계약업체 : 진명기업주식회사 대표 최환준 임송농산(주) 양기훈

다. 계약기간 : 2014.6.1 ~ 2014.12.31(총계약기간 : 2014.6.1.~2016.5.31.)

라. 계약금액 : 금604,882,520원(총부기계약금액 금2,487,199,280원)

마. 변경내역

- 계약금액변경

․ 당초 : 금604,882,520원(총부기금액 금2,487,199,280원)

· 변경 : 금400,987,340원(총부기금액 금2,487,199,280원)

- 차수별 물량조정                                               (단위:톤)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총물량		75,600	75,600	변동없음
차수별	1차(2014)	18,600	12,408	감6,192톤
	2차(2015)	41,000	41,000	변동없음
	3차(2016)	16,000	22,192	증6,192톤

- 물량조정에 따른 차수별 금액변경 내역                             (단위:원)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총용역비		2,487,199,280	2,487,199,280	변동없음
차수별	1차(2014)	604,882,520	400,987,340	감203,895,180원
	2차(2015)	1,353,849,200	1,353,849,200	변동없음
	3차(2016)	528,467,560	732,362,740	증203,895,180원

바. 변경사유 : 차수별 물량조정

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙 임 :  1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 2부.

3. 합의서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	안영환		정수과장	代이용은		영등포아리수정수센터소장	12/18 임정규
협조자	행정관리과장	안창수		계약1팀장	김점선
시행	정수과-9793	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5648	/전송	3146-5691	/	gory303@seoul.go.kr	/	대시민공개