투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(일원터널 정밀안전진단 및 성내유수지교 정밀점검용역) 시행

1. 우리사업소에서 시행중인 『일원터널 정밀안전진단 및 성내유수지교 정밀점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 일원터널 정밀안전진단 및 성내유수지교 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2014. 04. 28 ~ 2014. 12. 23.

다. 용 역 사 : (재)한국건설품질연구원 대표 김 인 식

라. 변경사유 : 자문위원 참여인원수 정산에 따른 감액사유 발생

마. 변경내역

(단위 : 원)

구 분		금 액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총용역비		105,800,000	105,305,000	감) 495,000
도급비	공급가액	96,181,819	95,731,819	감) 450,000
	부가가치세	9,618,181	9,573,181	감) 45,000
	계	105,800,000	105,305,000	감) 495,000
이 전 비		-	-	-

바. 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비(감495,000원)

붙 임   1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	윤철식		시설보수과장	박용선		동부도로사업소장	12/18 代김현수
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-4909	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동 2번지) 동부도로사업소(시설보수과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0371	/전송	02-2040-0308	/	ycs1000@seoul.go.kr	/	대시민공개