투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결통지-차집관거 성능개선 시설공사(2014년도분)

물재생과-7297(2014.12.16.)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 차집관거 성능개선 시설공사(2014년도분)

나. 계약금액 : 감 금78,255,200원(금칠천팔백이십오만오천이백원)

- 변 경 : 금827,204,000원(금팔억이천칠백이십만사천원)

- 당 초 : 금905,459,200원(금구억오백사십오만구천이백원)

다. 변경사유 : 물량 감소 반영

라. 계 약 일 : 2014년  05월  27일 (변경계약일 : 2014년 12월 17일)

마. 착 공 일 : 2014년  05월  29일

바. 준공기한 : 2014년  12월  31일

사. 계약업체 : 서일종합건설(주) (대표 김선경)

(☎ 031-399-2759)

붙임  1. 계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	12/18 김홍덕
협조자
시행	관리과-15451	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개