문서번호	도로보수과-7509
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
나철흠		代박일연	12/18 代김현수
협조

(2014년도 도로굴착복구 및 포장도로정비공사 검측감리용역)

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

동부도로사업소

(도로보수과)

(2014년도 도로굴착복구 및 포장도로정비공사 검측감리용역)

준공기한 연기 검토보고

관내 시행중인 도로굴착복구 및 포장도로정비공사 검측감리용역(강남권역)에 대한 준공기한 연기에 검토 보고임

Ⅰ	용역개요

용 역 명 : 2014년도 도로굴착복구 및 포장도로정비공사 검측감리용역(강남권역)

용역개요

○ 검측감리 대상 : 동부,남부,강서도로사업소 관내일원

○ 감리규모

- 도로굴착복구공사 : 1,913개소 126,241㎡

- 포장도로정비공사 : 1,587개소 589,200㎡

용역기간 : 2014.3.28.~12.22

용 역 비 : 587,700,000원

용 역 사 : 한국건설관리공사  대표 김원덕

Ⅱ	보고내용

『도로굴착복구공사』 및 『포장도로정비공사』의 준공기한이 2015.2.28.까지로서 향후, 생활민원 및 소규모 도로굴착복구에 따른 감리업무가 요구되므로 준공기한 연기가 필요한 실정임

감리원 투입일 검토

구 분	예 산 액 (원인행위)	투 입 인원수	감리원 투입일		비고
			계약상	12.31일 기준
감리사(총괄)	587,700,000	1 명	9 개월	8.9 개월	22일/월 기준
검측감리원		동부2, 남부1 강서1명	58 개월	57.1개월

준공기한 연기

○ 당초 2014.12.22 →  변경 2015. 1. 15

○ 귀책사유 : 발주청

Ⅲ	보고자 의견

도로굴착복구 등 공사의 준공기한이 남아 있고 소규모 도로굴착복구가 예상되므로 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.  끝.