투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 건설폐기물 처리용역 설계변경 시행

1. 시설과-6264호(2014. 12. 17.)관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『2014년 건설폐기물 처리용역』설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : 2014. 3. 31. ~ 2014. 12. 31.

다. 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 600톤

라. 계 약 자 : ㈜창현엘씨엠 대표 이상기

마. 계약금액 : 금14,185,000원

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총 용 역 비		금14,185,000원	금16,896,000원	(증)2,711,000
도급비	공 급 가 액	금12,895,455원	금15,360,000원	(증)2,464,545
	부가가치세	금1,289,545원	금1,536,000원	(증)246,455

바. 변경사유 : 신규공사 및 공종 발생과 공사물량 증·감에 따른 건설폐기물 물량 증·감 발생

사. 예산과목 :

○ 2014년 토목시설물 정비공사(연간단가)

- 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 공원·녹지관리 수준향상, 산하공원운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비 : 금12,551,000원

○ 서서울호수공원 산책로 정비공사

- 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 공원·녹지관리 수준향상, 산하공원운영, 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비 : 금1,442,000원

○ 2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가)

- 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 공원·녹지관리 수준향상, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 시설비 : 금2,903,000원

첨 부 : 1. 설계변경 계획 검토 보고(방침서) 1부

2. 설계서(변경) 1부.  끝.

주무관	이석중		기전시설팀장	오재영		시설과장	한성현		서부공원녹지사업소장	12/18 안해칠
협조자	공원운영과장	조준수
시행	시설과-6290	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산동 390-1)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	300-5569	/		/	대시민공개