문서번호	정수시설과-3162
보존기간	년
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		박심근	12/18 오세영
협 조
	주무관			이무규

설계변경(정산) 보고

〔2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)〕

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경(정산) 보고

〔2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)〕

정수장 전기설비의 원활한 유지보수를 위하여 연간단가계약으로 시행중인 『2014년 정수장 전기설비 보수공사』에 시공물량 증·감 등 설계변경 사항이 발생하여 정산하고자 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 4. 21. ～ 12. 31.

○ 계약금액 : 43,864,790원

○ 계약상대자 : ㈜장학전력 대표자 정진호

○ 공사규모

- 염소투입설비 현장제어반 등 20개소 34면 서지보호기(SPD) 설치

- 탈수기동 등 기존 건물의 일반조명 171등 LED조명으로 교체

- 관사 49세대 노후 분전반 정비

- 기타 노후 전기설비 보수(정비) 1식

□ 설계변경(정산)

○ 설계변경 사유

- 제3차 작업지시 물량 설계 반영(정산)

※ 제1차, 제2차 작업지시 사항은 기 설계 반영

- 건강보험료, 연금보험료 등 정산 (증빙서류 비제출에 따른 감액)

○ 설계변경 내용

- 계약금액

변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
43,864,790원	40,499,000원	(감) 3,365,790원

- 시공물량 (상세내역 별첨)

구 분	공 종	금 액
물량 감소	접지선 설치(매설) 외 100건	(감) 1,383,633원
물량 증가	비닐절연접지케이블(옥내) 외 3건	(증) 700,088원
보험료 감액	건강, 연금, 노인장기요양보험료	(감) 897,654원
제경비 정산	순공사원가 변경분 반영	(감) 1,784,591원
계		(감) 3,365,790원

□ 조치의견

○ 위와 같이 공사시행 중 발생한 시공물량 증·감 및 보험료 정산에 따른 사항에 대하여 설계변경심의소위원회를 개최 하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 계약 후 준공처리 하고자 함.

붙임 : 1. 시공물량 변경현황 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.