문서번호	교량보수과-9046
결재일자	2014.12.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김승진		12/18 박병연
협 조
	주무관			구성철
	주무관			유태용

도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고

(8~10차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(8~10차)

자동차전용도로상 시설물 손상에 대하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년도 도로시설물일상유지보수공사(강서-전용도로)

나. 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 2015. 2. 28

다. 도 급 비 : 628,537,000원

라. 공사개요

신축이음보수 33m, 단면보수 834㎡, 표면보수 920㎡, 균열보수 등

마. 시 공 사 : 청구건설 대표 김진호

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

- 8차 작업지시『근거:교량보수과-6781(2014.9.24)』

․ 작업기간 : 2014. 9. 25 ~ 10. 24

․ 작업완료 : 2014. 10. 22

- 9차 작업지시근거:『교량보수과-7605(2014.10.24)』

․ 작업기간 : 2014. 10. 27 ~ 11. 20

․ 작업완료 : 2014. 11. 5

- 10차 작업지시근거:『교량보수과-8019(2014.11.11)』

․ 작업기간 : 2014. 11. 12 ~ 12. 11

․ 작업완료 : 2014. 12. 5

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
9차	1	올림픽대로 복개구조물	상부구조물(김포방향 600m)	신축이음장치 교체	5.4m	신축이음장치 교체	5.4m
	2		상부구조물(김포방향 600m)	신축이음장치 교체	5.4m	신축이음장치 교체	5.4m
	3		파쇄물 운반비 (콘크리트)	파쇄물 운반비	1.41㎥	파쇄물 운반비	1.41㎥
	4		파쇄물 상차	파쇄물 상차	1.41㎥	파쇄물 상차	1.41㎥
	5	염창교	교대(A1,성산방향)	후타재 보수	1.5m	후타재 보수	1.5m
10차	1	염창 입체교차로	교량연석부 철근노츨 (A1~P1,염창방향)	단면보수	186.32㎡	단면보수	178.17㎡
	2		교량연석부 철근노츨 (A1~P1,염창방향)	열화단면제거	186.32㎡	열화단면제거	178.17㎡
	3		교량연석부 철근노츨 (A1~P1,염창방향)	표면보수	186.32㎡	표면보수	178.17㎡
	4		교량연석부 철근노츨 (A1~P1,염창방향)	고압 물청소	186.32㎡	고압 물청소	178.17㎡
	5		교량연석부 철근노츨 (A1~P1,염창방향)	그라인딩	186.32㎡	그라인딩	178.17㎡
	6		파쇄물 운반비 (콘크리트)	파쇄물 운반비	1.86㎥	파쇄물 운반비	1.78㎥
	7		파쇄물 상차	파쇄물 상차	1.86㎥	파쇄물 상차	1.78㎥
	8		교통정리	6일	64.0hr	6일	64.0hr
	9		라바콘설치	라바콘	63.0개	라바콘	63.0개
11차	1	목동교 동측 입체교차로	교량스라브콘크리트 파손(P16,시점부)	단면보수	0.35㎡	단면보수	0.35㎡
	2		교량스라브콘크리트 파손(P16,시점부)	열화단면제거	0.35㎡	열화단면제거	0.35㎡
	3		교량스라브콘크리트 파손(P16,시점부)	리프트 트럭	4.0hr	리프트 트럭	4.0hr
	4		램프F후타재파손 (P2,P3)	후타재보수	3.0m	후타재보수	3.0m
	5	경인1 지하차도	지하차도시점,중간 옹벽구간(서울방향)	균열보수	21.3m	균열보수	13.8m
	6		지하차도시점 박스구간(서울방향)	타일보수	0.82㎡	타일보수	0.82㎡
	7	오금교동측 지하차도	지하차도 내부 (안양방향)	유도배수로 설치	30.0m	유도배수로 설치	30.0m
	8		지하차도 내부 (안양방향)	표면보수	30.0㎡	표면보수	28.0㎡
	9		지하차도 내부 (안양방향)	고압 물청소	30.0㎡	고압 물청소	28.0㎡
	10		지하차도 내부 (안양방향)	그라인딩	30.0㎡	그라인딩	28.0㎡
	11		지하차도 내부 (안양방향)	리프트 트럭	40.0hr	리프트 트럭	40.0hr
	12		지하차도 내부 (안양방향)	타일보수	0.02㎡	타일보수	0.02㎡
	13		지하차도 내부 (안양방향)	기존 배수로 고재처리	118.95㎏	기존 배수로 고재처리	118.95㎏

다. 개략공사비 : 30,140천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시내용과 같이 이상없음 작업완료하여 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.