투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 도로굴착복구공사(연간단가) 설계변경(제2회) 및 폐아스콘 설계변경(제1회) 시행 - 서부

1. 우리사업소에서 시행중인 『2014년 도로굴착공사(연간단가)』 및 폐아스콘처리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다

가. 2014년 도로굴착복구공사(연간단가) - 제2회

- 공사기간 : 2014. 03. 21 ~ 2015. 02. 28

- 총공사비 : 2,344,358천원

- 도급비 1,308,989천원, 관급비 860,659천원, 이전비 80,000천원

- 도급자 : (주)성지씨엔지  대표자 김종태

나. 2014년 도로굴착복구공사 폐아스콘 처리용역 - 제1회

- 공사기간 : 2014. 04. 30 ~ 2014. 12. 31

- 총공사비 : 27,966천원

- 도급자 : 우광개발주식회사 대표자 임태권

다. 설계변경 내역

구 분		설계변경 내역			비고
		당 초	변 경	증 ㆍ 감
총계 (굴착복구+폐아스콘)		2,372,324,000	4,262,860,000	증)1,890,536,000
도 급 비	굴착복구공사	1,308,989,000	2,457,125,000	증)1,148,136,000
	제설공	94,710,000	94,710,000	-
	계	1,403,699,000	2,551,835,000	증)1,148,136,000
관 급 비		860,659,000	1,484,652,000	증)623,993,000
이 전 비		80,000,000	150,000,000	증)70,000,000
폐아스콘처리용역 (제1회 설계변경)		27,966,000	76,373,000	증)48,407,000

라. 설계변경 사유

◦ 도로굴착 복구공사는 도로굴착기관의 관리청 복구의뢰에 따라                       공사량의 증·감이 발생되는 공사로써, 금년 굴착복구의뢰량                        증가에 따른 변경 실시

◦ 굴착복구의뢰량 증가에 따른 관급자재(아스팔트) 물량 증가

◦ 굴착복구의뢰량 증가에 따른 이전비(노면표시공사) 물량 증가

·「2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가)」포함 시행【도로보수과-1476,                              2014. 2. 17】

◦ 굴착복구의뢰량 증가에 따른 폐아스콘 물량 증가

마. 예산과목 : 4,262,860,000원

◦ 도시안전실 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사,

시설비 (￦4,071,515,000원)

◦ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로도로부속물관리, 노후포장도로정비공사,

시설비 (￦96,635,000원)

◦ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로도로부속물관리, 제설대책추진,

사무관리비 (￦94,710,000원)

첨부 1. 설계변경 검토보고서 1부

2. 설계변경 내역서 각1부.   끝.

주무관	김중철		도로보수과장	이규철		서부도로사업소장	12/18 김만수
협조자	주무관	이상하		주무관	이경남		관리단속과장	김영선
시행	도로보수과-11367	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8359	/전송	02-300-8364	/	kimjc4223@seoul.go.kr	/	대시민공개