함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제2회) 및 차수별 금액변경 시행(‘14년 서초구 관내상수도시설물설치및보수공사)

1. 우리 사업소에서 시행중인″ 2014년 서초구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약) ″에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회) 및 차수별 금액 변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명  : 2014년 서초구관내 상수도시설물설치 및 보수공사

나. 계 약 자 : ㈜화영건설, 대표자 송미영

다. 계약기간 : 2014. 5. 2~2014.12. 31

(전체 계약기간 2014.5.2~2015.4.30.)

라. 부기금액 변경사항(총부기금액 변경없음)

구 분		총부기금액	1차수 금액 (‘14년 집행)	2차수 금액 (‘15년 집행예정)	비고
계약금액	당 초	733,798,100	593,210,000	140,588,100
	변 경	733,798,100	416,152,000	317,646,100
	(증․감)	-	감)177,058,000	증)177,058,000

마. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

바. 하자기간 : 준공검사일로 부터 3년

사. 예산과목 :

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후밸브)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축,소방용수시설등의 설치 및 관리,일반회계,소방용수시설설치,시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설보수,시설비

따로붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 관련서류 각1.  끝.

주무관	최덕환		시설관리과장	代윤복철		강남수도사업소장	12/18 代문인환
협조자
시행	시설관리과-26276	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4904	/전송	02-3146-4939	/	cowboy8817@seoul.go.kr	/	대시민공개