투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2차) 시행[2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)]

1. 기전과-11642(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진한 교통신호기공사에 대하여 책임감리사로부터 설계변경(2차)보고가 접수되어 검토한 바 적합하여 설계변경을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)

나. 공사기간 : 2014. 4. 11. ~ 2015. 2. 28.

다. 시공업체 : ㈜세진종합이엔씨 대표 이성임

라. 공사금액 : 금504,514,850원

마. 설계변경 내용

❍ 공사금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	504,514,850	696,608,000	192,093,150(증)	-

❍ 설계변경 사유

- 교통신호기 미처리 규제 및 소방출동시스템 구축을 위해 추가 배정된 예산을 공사물량에 반영

-  연간단가 공사의 특성상 작업물량을 추정하여 공사가 추진되는 바, 작업지시 완료 후 당초 계약물량과 실제 공사추진에 따른 변경된 공사물량 반영

바. 예산과목 : 도로교통 소통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리,

교통신호기 신설 및 보수, 시설비(교통사업특별회계)

붙임 :  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경검토서(책임감리사) 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	박신범		기전과장	정윤식		북부도로사업소장	12/18 代정수현
협조자	주무관	백윤광		계약1팀장	김점선
시행	기전과-11673	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5472	/전송	02-945-5074	/		/	대시민공개