투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행 [양화대교외 1개소 정밀점검용역]

우리 사업소에서 시행 중인 『양화대교외1개소 정밀점검용역』건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 양화대교외 1개소 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2014. 6. 11. ~ 2015. 02. 05.

다. 도 급 자 : ㈜삼림엔지니어링  대표 김인석

라. 설계변경사유 : 자문회의 1회 개최에 따른 자문회의비 지급금액 정산

마. 설계변경내역                                   (단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 감	비고
총 용 역 비		183,048,000	182,548,000	감) 500,000
용역비	공급가액	164,319,182	164,319,182	0
	손해배상보험	1,179,000	1,179,000
	부가가치세	16,549,818	16,549,818	0
	자문회의비	1,000,000	500,000	감)500,000

바. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전

점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	우창원		교량보수과장	12/18 이수근
협조자	주무관	백운경		주무관	이경남		계약1팀장	김점선
시행	교량보수과-8057	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8355	/전송	300-8364	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개