투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	현대건설주식회사 망우~금곡 복선전철 1공구 노반신설공사 현장소장 강지원 귀하
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사(노면표시) 승인기간 연기(2014-0204-001)

1. 현건CY96-2014-A1022(2014.12.18)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청한 교통안전시설물 원인자부담공사 승인기간 연기 요청에 대해 아래와 같이 승인하니, 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방」에 맞게  설치하여 주시고 T-Gis시스템 입력 후 준공확인 요청하여 주시기 바랍니다.

※ 승인기간 연장

공 사 명		양원리길(신내충전소앞~신내차량기지입구) 교통안전시설물 설치 원인자 부담공사(노면표시)	비 고
공사기간	당초	2014.1.27 ~ 2014.12. 31.	공사관리번호 2014-0204-001
	변경	2014.1.27 ~ 2015.12. 31.
연기 사유		토목공사 지연으로 인한 절대공기 부족

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	하승환		도로보수과장	12/18 국중진
협조자
시행	도로보수과-5724	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개