문서번호	교량보수과-8056
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
우창원		12/18 이수근
협조
	주무관		백운경

『양화대교외 1개소 정밀점검용역』 설계변경 검토보고

2014. 12.

서부도로사업소

(교량보수과)

『양화대교외 1개소 정밀점검용역』

설계변경 검토보고

우리 사업소와 도급계약을 체결하고 시행중인 『양화대교외 1개소 정밀점검용역』 과 관련하여 계약 내용중 자문회의비 변경사항에 대한 설계변경 시행 검토 보고임

용역개요

용 사 명 : 양화대교외 1개소 정밀점검용역

용역기간 : 2014. 06. 11 ~ 2015. 02. 05

용역개요

- 양화대교 : 연장 1,053m, 폭 33.2m

- 서강대교 : 연장 1,302m, 폭 29m

용역금액 : 183,048,000원

용 역 사 : ㈜삼림엔지니어링 대표 김인석

설계변경 사유

정밀점검용역 시행중 자문회의 1회 개최로 자문회비 감액사유 발생

(감액 500,000원)

용역비 변경내용                                        (단위:원)

구 분		공 사 금 액			비 고
		당 초	변 경	증․감
총 용 역 비		183,048,000		감)500,000
용역비	공급가액	164,319,182	164,319,182	0
	손해배상보험	1,179,000	1,179,000	0
	부가가치세	16,549,818	16,549,818	0
	자문회의비	1,000,000	500,000	감)500,000

조치계획

상기와 같이 변경사항에 대하여는 설계변경시 정산처리하여 관련업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  설계변경 내역서 1부.  끝.