문서번호	시설관리과-26264
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
최덕환		12/18 代윤복철
협 조
	주무관			이승우
	주무관			박종태
	주무관			이재윤
	주무관			이춘기

설계변경 심의 의견서(제2회)

(2014년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의 의견서

○ 공 사 명 : 2014년 서초구 관내  상수도 시설물 설치 및 보수공사

신청부서명	시설관리과
작 성 자	최 덕 환
제출년월일	2014.12.18

심의 의원회 의견

○ 심의일시 : 2014. 12. 18(목), 오전 10 : 00

○ 심의장소 : 강남수도사업소4층(시설관리과)

○ 심의의견  : 설계변경(제2회) 심의 의견을 아래와 같이 제시함.

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	시설관리과장	물량변동 적정성	현장여건 변경 적정	송근호 (代윤복철)
		제경비 적정산정	적정함
		신규공정 적정성	신규시공건 공정 정함
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	증,감물량 적정반영	박종태
		제경비 적정산정	관련규정 요율 적정반영
		신규공정 적정성	시공된 공정 적정반영
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	증감물량 적정 반영	이승우
		제경비 적정산정	적정요율 반영
		신규공정 적정성	현장여건상의 신규발생으로 적정함
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	물량 증,감 수량 적정	이재윤
		제경비 적정산정	요율 적정 반영됨
		신규공정 적정성	신규단가 낙찰율적용 적정
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	증,감물량 적정반영	이춘기
		제경비 적정산정	적정하게 반영함
		신규공정 적정성	신규공정 단가산출 적정

설계변경 심의요약서

우리사업소 시행중에 있는  ″ 2014 서초구 관내 상수도 시설물 설치 및  보수공사 ″ 에  대하여 신규공종 및 물량변경사항이 발생하여 아래와 같이 심의내용을 보고드림

공사개요

가. 공 사 명 : ″2014년 서초구관내 상수도시설물설치 및 보수공사(제1회)″

나. 공사기간(총부기기간) : 2014. 5. 2 ~ 2015. 4. 30

다. 계약금액 : 금733,798,100원

라. 공사개요 : 원형밸브실 정비 188개소, 소화전설치및보수 113개소,

마. 계 약 자 : (주)화영건설, 대표자 송미영

설계변경 사유 및 세부내용

1) 신규공종 발생 및 시공물량변경(변경사유)

- 신규공종발생  : 가동형제수밸브외 21개 공종

- 시공물량변경  : 콘크리트 포장절단외 78개공종(내역서)

2) 주요공종 시공물량 증 ․ 감  현황                         (단위/개소)

구 분	공 종	단 위	당 초	변 경	증, 감
1	원형밸브실 설치	개소	188	189	증) 1
2	소화전설치 및 보수	개소	113	113	-
3	기어박스 정비	개소	19	19	-
4	고정밸브 및 사다리 설치	개소	101	101	-

3) 설계변경 금액(금액변경 없음)

(단위/개소)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	998,798,100	998,798,100	-
도 급 비	733,798,100	733,798,100	-
관 급 비	265,000,000	265,000,000	-

붙 임 : 설계변경 자료 각 1부.  끝.