문서번호	하천관리과-2611
결재일자	2013.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물관리정책관
김대희	임춘근	이진용		02/19 정만근
협 조
	치수관리팀장		신용철
	치수설비팀장		구자훈
	하천계획팀장		박영서
	하천관리팀장		김준형
	청계천관리팀장		유봉현

2013년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비 계획

2013. 2

도 시 안 전 실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	25개 자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사 등	)	무 □

2013년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비 계획

2013년도 우기를 대비하여 빗물펌프장 등 각종 수방시설과 재개발, 재건축 등 대형공사장 및 축대, 옹벽, 급경사지 등 수해취약지역에 대한 일제점검을 실시하고 우기 전까지 정비를 완료하여 풍수해를 예방하고자 함

Ⅰ

점 검 대 상

하천 및 수방시설물

하천 36개소(국가: 3, 지방: 33) 및 제방(444km)

빗물펌프장 111개소, 수문 299개소

유수지 52개소, 저류조 16개소, 빗물받이, 맨홀 등

풍수해 취약시설 및 지역

민간 공사장 : 재개발․재건축, 대형건축공사장 및 장기공사중단 현장 등

공공 공사장 : 도로, 교량, 지하철, 하수관거, 택지개발공사장 등

사 면 시 설 : 옹벽, 축대, 절개지, 산사태․낙석 우려지역 등

지 하 시 설 : 지하차도, 지하상가, 공동구, 지하철 등

유수 장애시설 : 하천 및 하수관거내 퇴적물 등 유수장애 시설,

상류지역 수해유발 적치물 등

※ 청계천 내 시설 및 수방 준비태세 포함

돌 출 시설  : 대형입간판, 돌출간판, 철탑 등

Ⅱ

추 진 계 획

점검 및 정비 기간

2013. 2. 21 ~ 2013. 4. 30

하천 및 수방시설물

빗물펌프장, 수문, 유수지, 빗물저류조, 하천제방(하천내 공사장포함), 자연재해위험지구는 물관리정책관(하천관리과)주관 별도 점검계획에 의거 점검실시

▷ 전문가, 관계공무원 등으로 합동점검반 편성 점검

※ 3회시행 : 최초 대상시설 전수점검후 지적사항 조치결과 2, 3차 점검시행

▷ 해당 자치구는 합동점검 수행 및 협조

풍수해 취약시설 및 지역

【1차 점검 및 정비】

- 점검책임자 : 자치구․사업소 담당과장, 본부․공사 담당부장

- 기 간 : ‘13. 2. 21 ~ 3. 6까지(1차 점검후 3.18일까지 정비조치)

▷ 시설물 및 공사장 담당 부서장 주관 전문가와 대상파악 및 점검․정비 실시

▷ 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

【2차 점검 및 정비】

- 점검책임자 : 자치구 담당국장, 사업소 소장, 본부 담당국장, 공사 담당이사

- 기 간 : ‘13. 3. 20 ~ 3. 31까지(2차 점검후 4.15까지 정비 완료)

▷ 시설물 및 공사장 담당 국장, 전문가 등 합동점검 시행

▷ 1차 점검결과 미조치된 사항을 위주로 중점 점검 및 정비 조치

▷ 기간내 정비가 곤란한 경우에는 '13. 4. 30까지 정비대책을 별도 수립

【3차 점검시행】

- 2차에 걸쳐 미조치된 사항 위주로 집중 점검 실시

▷ 본청 주관정책관, 시설 담당기관장

【세부추진일정】

점검계획 수립 및 대상파악 제출 (2.27까지 제출)		1차 점검 시 행 (2.21~3.6)		지적사항 정비 및 대책수립 (3.7~3.18)		지적사항 및 조치결과 제출 (3.21까지 제출)
[총괄부서]		[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]
2차 점검 시 행 (3.20~3.31)		지적사항 최종 정비 및 보완 (4.15까지)		2차 조치결과 및 미조치사항 제출 (4.18까지 제출)		3차 합동점검 (미조치사항) (4.30까지)
[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]		[하천관리과]

※ 총괄부서 : 자치구, 본부․사업소 → 풍수해담당부서

※ 담당부서 : 수방시설 및 취약시설물 관리,담당,소관부서

Ⅲ

행 정 사 항

점검계획수립

계획수립[총괄부서]

- 대  상 : 수방시설 및 모든 풍수해 취약시설 포함

- 점검반 : 해당 분야별 전문가 및 관계 공무원으로 구성․운영

담당부서별 1,2차 자체점검(전문가 포함)후 3차 점검은 합동점검으로 시행

수방시설 및 대형 공사장에 대한 관리자 및 점검책임자 지정관리

점검대상, 지적사항 및 조치결과 제출

총괄부서에서 자료수합 작성 및 제출

- 점검대상 현황, 1차 지적 및 조치결과는 3.21일까지 총괄부서에서 하천관리과로 제출

- 2차 지적사항 및 조치결과는 4.18일까지 하천관리과로 제출

⇒ 미 조치사항에 대해서는 4.30일까지 정비대책 포함

점검결과 중대한 결함사항 조치

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견 될 경우 응급조치 및 대책마련

- 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기전까지 완료될 수 있도록 조치

재난관리시스템상에 시설․자원관리분야에 점검사항 등록 및 관리

첨 부 : 1. 풍수해취약시설(지역) 현황 서식 1부

2. 수해취약시설 일제점검 및 정비결과 보고서식 1부.  끝.