투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	금보건설(주) 대표 이인희
(경유)
제목	작업완료기간 연기요청 승인통보

1. 서부 금보2014-31(2014.12.15.)호와 관련입니다.

2. 귀 사가 우리 사업소와 계약체결하여 시행중인『‘14년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사』와 관련 작업지시 연기요청에 대하여 승인하오니, 본 공사 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 작업기간 연기현황

구분	당초	당초	연기사유	비고
작업지시 8차	2014. 07. 29 ~ 2014. 12. 15.	2014. 07. 29 ~ 2015. 01. 13.	도로공사 협의 및 우천으로 인한 작업지연	모래내고가 정비

.끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이종욱		주무관	김지환		시설보수과장	12/18 신동헌
협조자
시행	시설보수과-9637	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8374	/전송	300-8384	/		/	대시민공개