투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	유입분배조 통합반류수 유량계 신설 계약 변경 시행

2014년 10월 23일 계약되어 구매설치예정인 『유입분배조 통합반류수 유량계 신설』건에 대해 계약변경을 하고자 합니다.

가. 건    명 : 유입분배조 통합반류수 유량계 신설

나. 계약금액 : 17,380,000원(일천칠백삼십팔만원)

다. 계 약 자 : 신우에프에이(김동언)

구분	변경전	변경후	비고
납품기한 연장	2014.12.22	2015.1.31

라. 변경내용

마. 변경사유 : 통합반류수의 유량을 측정하는 유량계가 설치되기전에

유량계 고장시 운용할 바이패스배관 설치와 유량계 유지보수를 위한

유량계실의 신설이 필요하여 납품기한을 연장하고자 함

붙임문서  1. 계약변경방침서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김지영		주무관	강희석		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	12/18 代김웅남
협조자	주무관	이호복
시행	물재생과-4166	(	2014.12.17.	)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개