투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰[2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사)]

1. 기전과-11643호(2014.12.18)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 보행불편 해소와 교통소통의 질을 높이기 위해 추진한 교통신호기공사에 대하여 책임감리사로부터 설계변경(정산) 보고가 접수되어 검토한 바 적합하여 설계변경을 시행코자 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사

(종합청사별관 외교통상부 앞)

나. 공사기간 : 2014. 10. 16 ~ 2015. 2. 28

다. 시공업체 : (주)대호전력기술 대표 조진호

라. 공사금액 : 금58,816,060원

마. 설계변경 내용

❍ 공사금액 변경                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	58,816,060	62,199,000	3,382,940(증)	-

❍ 설계변경 사유

- 문서 ″종로구청 도로과-13113(2014,11.03)″ 통합지주 설치 협조요청으로 물량변경 및 현장 여건에 맞도록 공정량 증•감 등 기타 제경비 정산

바. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비(401-01)

붙임 :  1. 설계변경(정산) 시행   1부.

2. 조치계획 검토 보고 1부.

3. 설계변경 보고(감리사) 1부.

4. 설계변경내역서 1부.

5. 제비율검증서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	박정민		기전과장	12/18 정윤식
협조자
시행	기전과-11690	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 768 (번2동 365-1)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5476	/전송	02-945-5074	/	jmp7019@seoul.go.kr	/	대시민공개