과 장		12/18 이석재	심사자	이화신		설계자	최진규		설 계	심 사		결 재
									2014년 12월 일	2014년 12월 일
변 경 설 계 서
	공 사 (용역) 명 : 2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역
	구 분				당 초			변 경			비 고
	총 용 역 비				4,090,000			11,092,000			증)7,002,000
	용역비	공 급 가 액			3,718,182			10,083,637			증)6,365,455
		부 가 가 치 세			371,818			1,008,363			증)636,545
		계			4,090,000			11,092,000			증)7,002,000
공사(용역)개요 : ▶ 당초 : 건설폐기물 운반 82.6㎥, 처리 190톤 ▶ 변경 : 건설폐기물 운반 247㎥, 처리 480톤