문서번호	교통운영과-3294
결재일자	2013.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장		교통운영관
박정재	김종호	代최정수		02/21 박영섭
협 조

「2012년 교통안전시설 설치공사」

실시설계(강남)용역 변경준공보고

2013. 2

도시교통본부

교통운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「2012년 교통안전시설 설치공사」

실시설계용역(강남) 변경준공 보고

2012년 교통안전시설 설치공사(노면표시, 안전표지, 표지병)의 업무의 통일성과 질적향상을 위해 시행한 실시설계용역(강남)의 계약기간 도래로 아래와 같이 계약금액을 감액 조정하고 준공 처리코자 함.

용역 개요

용 역 명 : 교통안전시설 설치공사 실시설계용역(강남)

계약내역

지역	업체명(대표)	계약기간	계약금액(원)	비 고
강남	(주)대한콘설탄트 이 우 정	2012.3.5 ~ 2012.2.28	123,446,000

용역내용

∙ 서울지방경찰청 교통규제심의 관련사업

∙ 12개 자치구 및 3개 도로사업소에서 발생되는 긴급민원 및 유지

보수사업 등 불합리한 교통안전시설에 대한 실시설계.

설계완료내역

설계기간 : 2012. 3. 5 ~ 2013. 2.20

설계내역 : 1,341건

∙ 경찰청 교통규제심의 관련 실시설계 : 962건

∙ 사업부서 유지보수, 민원 등 실시설계 : 379건

설계내용

(단위 : 천원)

구 분	노면표시	안전표지	도로표지병	비고
설계물량	579,474m	4,343개	2,950개
공사금액	3,807,295	558,387	28,127

※ 실시설계용역(강북) 준공으로 ′12년 12월부터 강북지역 규제심의 및 유지보수 공사 설계업무수행

변경계약 내역

(단위 : 원)

구 분	교통안전시설 설치공사 실시설계용역(강남)			비 고
	당 초	변 경	증·감
용역금액	123,446,000	105,147,000	- 18,299,000
설계기간	′12.3.5 ~ ′13.2.28		없 음

변경사유 : 교통안전시설의 규제심의 및 유지보수공사 물량을

연간 설계하는 용역으로 설계용역수행금액이 계약

금액에 미달하여 감액조정

향후 계획

재무과로 변경계약 요청

변경계약 완료되면 변경금액으로 준공정산처리코자 함.

붙임  1. 2012년 교통안전시설 설치공사 실시설계용역(강남) 변경내역 1부.

2. 사업부서별 설계내역 1부.

3. 실시설계 세부내역서 1부.  끝.