투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(여의교 보수공사)

1. 서울시 시설관리공단 공사감독1처-13895(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인「여의교 보수공사」의 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 여의교 보수공사

나. 공사기간 : 2014.6.10. ~ 2014.12.26.

다. 도 급 자 : 동양강재건설㈜  대표 윤평한 외 1개사

라. 설계변경내역                                             (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		966,697,900	873,480,000		감) 93,217,900
도급액	공 급 가 액	826,089,000	794,072,728		감) 32,016,272
	부가가치세	82,608,900	79,407,272		감) 3,201,628
	계	908,697,900	873,480,000		감) 35,217,900
이 전 비		58,000,000	-		감) 58,000,000

마. 예산과목 : 도시안전실 도로시설과, 교량관리, 여의교보수공사, 시설비(1,041,607천원)

바. 변경사유 : 제경비 및 보험료 정산에 따른 설계변경

붙 임 :  1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 보고서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	정성오		주무관	금종융		시설보수과장	김찬구		남부도로사업소장	12/19 민승기
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-5313	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울시 영등포구 도림로 145(대림동)	/
전화	3284-5467	/전송	836-3093	/	somc0855@seoul.go.kr	/	대시민공개