문서번호	시설보수과-5310
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		남부도로사업소장
장창원	금종융	김찬구		12/19 민승기
협 조

예비준공검사 결과보고

(보라매고가도로 보수공사)

2014. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

예비준공검사 결과보고(보라매고가도로 보수공사)

서울시 건설공사 예비 준공검사 전면 실시계획에 의거 「보라매고가도로 보수공사」에 대한 예비준공검사를 실시하여 투명한 품질관리 확보로 공사관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 보라매고가도로 보수공사

○ 공사기간 : 2014. 6. 5. ~  2015. 12. 21.

○ 계약금액 : 1,816,206,200천원

○ 공사개요 : 방음벽 철거 및 설치 1,541m

균열보수 149m, 단면보수 1,329㎡, 배수관교체 223m

○ 도 급 자 : 포코건설(주) 대표 홍성표

○ 감 독 자 : 서울시 시설관리공단(공사감독1처 박민현)

□ 예비 준공검사 시행

○ 일  시 : 2014. 12. 18.(목) 10:00 ~ 12:00

○ 장  소 : 보라매고가도로 보수공사 현장

○ 점검자

- 발  주  청 : 시설보수과장 김찬구, 시설7급 장창원

- 감  리  사 : 서울시 시설관리공단(공사감독1처) 박민현

- 시  공  사 : 포코건설(주) 현장대리인 박장규

- 외부전문가 : ㈜한국구조물안전연구원 이사 김대호(토목구조기술사)

■ 점검결과

○ 점검내용

- 방음판 설치 및 볼트체결상태 양호

- 신축이음장치 본체, 고무판 및 후타재 상태 양호

- 강박스 내부도장 보수 상태 양호

- 콘크리트 단면보수 상태 양호함

- 방음판 지주 볼트캡 파손 1개소는 교체가 요구되며, 콘크리트 단면보수

결과에 대한 부착력 테스트를 실시한 곳에 표면 그라인딩 필요

○ 점검사진

방음판 및 지지대 점검	신축이음장치 점검	G3박스 내부도장 점검
단면복구 부착상태 점검	방음판 지주 볼트캡 파손	표면 그라인딩 필요

■ 조치계획

○ 외부전문가와 합동으로 실시한 예비준공검사 결과 지적사항에 대하여 조치결과를 우리 사업소에 보고하고 지적사항 완료 후 준공검사 실시 하도록 감독청인 시설관리공단에 통보하고자 함.

첨 부 : 예비준공검사 자문위원 의견서 1부.  끝.