투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 잠실수중보 권양기실 전동기 제어케이블 교체공사

1. 기전설비1과-4574(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2. 기전설비1과에서 시행하는『잠실수중보 권양기실 전동기 제어케이블 교체공사』건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체(대표자)	계약금액(원)	계약기간
잠실수중보 권양기실 전동기 제어케이블 교체공사	경충전설(주) (******)	83,727,220	2014.10.20. ~ 2014.12.19.

나. 변경내역 : 계약금액 변경(감 3,304,220*), 준공기한 변동없음

구분	계 약 명	계약업체	계약금액(원)	계약기간
변경 전	잠실수중보 권양기실 전동기 제어케이블 교체공사	경충전설(주) (******)	83,727,220	2014.10.20. ~ 2014.12.19.
변경 후	잠실수중보 권양기실 전동기 제어케이블 교체공사	경충전설(주) (******)	********** *************	2014.10.20. ~ 2014.12.19.

다. 변경사유 : 현장 여건 반영을 위한 물량 조정

붙임 :  1. 변경계약 의뢰공문 각 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 12/19 서영관
협조자	주무관	강희진
시행	총무과-19475	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)