함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(뚝도 고도정수처리시설공사 CM용역-총차분 7회)

우리본부에서 시행중인「뚝도 정수센터 시설현대화 및 고도정수 처리시설공사 건설사업관리(CM)용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

○ 용 역 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리(CM)용역

○ 용역기간 : ’09. 5. 25. ~ ’14. 12. 25.(총차)

○ 계약금액 : 4,607,700,000원(총차)

○ 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산, 건설중인자산, 시설비및부대비, 감리비

○ 계 약 자 : (주)도화엔지니어링 대표 노진명 외 1개사

○ 설계변경 내역

① 변경사유

- 시설공사 준공기한 연장(’15.1. 6→’16.12.31)에 따른 건설사업관리자 투입계획 변경

② 설계변경 관련 근거

- 고도정수반-6291(’14.12.10.)

▸ ‘건설사업관리용역 기간연장 승인요청에 대한 검토 보고’

- 재무회계과-16391(’14.12.17.)

▸ ‘계약금액조정 심사결과 통보’

③ 총차분 계약기간 및 금액 변경 현황 (※금차분은 변경없음.)

- 계약기간

당 초	변 경	증 ․ 감
’09.05.25 ~ ’14.12.25	’09.05.25 ~ ’16.12.31	증)738일

- 계약금액

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	4,188,818,182	5,952,200,000	1,763,381,818
부가세	418,881,818	595,220,000	176,338,182
계	4,607,700,000	6,547,420,000	1,939,720,000

붙 임 : 1. 설계변경 현황 및 내역서(총괄7회) 각 1부.

2. 설계변경 관련 근거 각 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	문정주		고도정수반장	남정열		시설안전부장	이규상		상수도사업본부부본부장	전결 12/19 정득모
협조자	주무관	한희균		기전설비과장	代이흥수		기획예산과장	최생인
시행	고도정수반-6508	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개