투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	『갈현 도시농업체험원 조성공사 폐기물 처리용역』계약금액 (변경)수정 통보

1. 시설과-6258호(2014. 12. 17.) 및 공사감독3처-12779호(2014. 12. 17.)로 시설관리공단에서 제출한 『갈현 도시농업체험원 조성공사 폐기물처리용역』변경내역서를 검토하고 아래와 같이 수정통보 합니다.

가. 공 사 명 : 갈현도시농업체험원 조성공사 폐기물처리용역

나. 위    치 : 서울시 은평구 불광동 458-1

다. 공사개요 : 폐기물처리 1식

라. 공사기간 : 2013. 12. 20. ~ 2014. 12. 19.

마. 소요예산                                                (단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감 액	비 고
총공사비		23,966,000	37,374,000	증13,408,000
도급액	공급가액	21,787,273	33,976,364	증12,189,091
	부가가치세	2,178,727	3,397,636	증1,218,909
	계	23,966,000	37,374,000	증13,408,000

바. 도 급 자 : ㈜대아이디아이 신은식, ㈜도요이디아이 김상회

사. 변경사유 : 공사현장 여건에 따른물량 변경

아. 예산과목 : 푸른도시국공원조성과, 생활권공원확충, 도심공원확충, 갈현도시농업공원조성, 시설비및부대비, 시설비(사고이월, 도시개발특별회계)

붙임 관련공문 사본 및 변경설계서 각 1부.  끝.

								시설과장
주무관							정순주				토목시설팀장					윤학수					시설과장					전결 12/19 한성현
협조자
시행			시설과-6315										(						)		접수												(						)
우	121-850					서울특별시 마포구 월드컵로 243-60																/			http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		02)300-5534							/전송			02)300-5569					/	jsj130@seoul.go.kr													/	대시민공개