투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	노량교 슬래브(난간하부) 보수공사 설계변경 시행

1. 서울시 시설관리공단 공사감독1처-13932호(2014.12.18)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 「노량교 슬래브(난간하부) 보수공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 노량교 슬래브(난간하부) 보수공사

나. 공사기간 : 2014. 10. 20 ~ 2015. 3. 18

다. 총공사비 : 880,377,000원(도급비 794,264,000원, 이전비 86,113,000원)

라. 도 급 사 : ㈜삼기산업개발  대표 이강희

마. 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단(공사감독1처)

바. 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 자동차전용도로교량관리,

노량교 슬래브(난간하부) 보수공사, 시설비및부대비, 시설비

사. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감액	비 고
총 공 사 비		880,377,000	1,004,998,000	증)124,621,000
도급액	공급가액	722,058,181	835,350,000	증)113,291,819
	부 가 세	72,205,819	83,535,000	증) 11,329,181
	계	794,264,000	918,885,000	증)124,621,000
이전비 기타		86,113,000	86,113,000

아. 설계변경사유

- 물량 증가에 따른 변경 등

붙임 : 1. 설계변경 관련 공문서(서울시 시설관리공단) 1부.

2. 설계변경검토 보고서 1부.   끝

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
★주무관	임동운		교량보수과장	代임동운		남부도로사업소장	12/19 민승기
협조자	관리단속과장	송재우		계약1팀장	김점선
시행	교량보수과-3932	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711) 남부도로사업소 교량보수과	/
전화	3284-5426	/전송	832-5404	/	lduon@seoul.go.kr	/	대시민공개