문서번호	교량보수과-8077
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
우창원		이수근	12/19 김만수
협조
	주무관		백운경

『자동차전용도로 일상유지보수공사』 정산 설계변경 검토보고

2014. 12.

서부도로사업소

(교량보수과)

『2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사』

정산 설계변경 검토보고

우리 사업소와 도급계약을 체결하고 시행중인 『2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사』 가 완료됨에 따라 감독기관인 시설관리공단으로부터 정산 설계변경

(2차) 보고가 있어 이에 대한 검토 보고사항임

공사개요

공 사 명 : 2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사(연간단가)-서부

공사기간 : 2014. 4. 9 ~ 2015. 2. 28

공사개요 : 교면보수공 70a, 신축이음보수 68m, 교면방수 400㎡

콘크리트보수 145㎡, 청소등 부대공 1식

공사금액 : 803,000,000원

시 공 사 : 다사랑건설㈜ 대표 박진구

위탁감독 : 서울특별시 시설관리공단(감독 박준혁)

설계변경 내용

주요공종 변경내용

공 종	규격	단위	수 량
			당 초	변 경	증·감
New F/J A-Type	야간, #80	m	-	11.2	증) 11.2
조류방지시설물	버드넷(조류방지망)	㎡	-	553	증) 553
조류방지시설물	스파이크니들	m	-	70	증) 70
콘크리트 표면처리	주간,인력,그라인딩	㎡	2,918	3,619	증) 701
점검통로설치	A-Type	m	-	16	증) 16
관절형 교량용 방호책	(3단 * W200)	경간	16	24	증) 8
구조물세척	주간	㎡	666	761	증) 95

설계변경(정산) 금액

구 분		공 사 금 액			비 고
		당 초	변 경	증․감
총공사비		803,000,000	882,420,000	증)79,420,000
도급비	공급가액	730,000,000	802,200,000	증)72,200,000
	부 가 세	73,000,000	80,220,000	증)7,220,000
	계	803,000,000	882,420,000	증)79,420,000
관 급 비

설계변경 사유

- 예산 추가 배정에 따른 공사물량 증가 및 신규 공종추가

- 작업지시 현장여건에 따른 수량변경

- 기타 제경비 금액정산

검토의견

제반 설계도서를 검토한 바, 단가 및 수량이 적정하게 산출된 것으로 판단되어 시설관리공단 보고내역과 같이 설계변경 시행코자 함.

첨부 : 1. 시설관리공단 검토보고서 각 1부.

2. 설계변경(2회-최종) 내역서 1부.

3. 제비율 검증 1부.   끝.