함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	기성시행(2014년 방화1동외 10개동 상수도공사-2차)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는『2014년 방화1동외 10개동 상수도공사(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 2차 기성을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 방화1동외 10개동 상수도공사(장기계속)

나. 수 급 인 : (주)삼오진건설 대표 김봉중

다. 계 약 일 : 2014. 07. 01

라. 준공기한 : 2015. 06. 30

마. 금회공사시행기간 : 2014.08.21 〜 2014.12.17(119일간)

바. 기성내역                                                        (단위 : 원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액	금 회 기성금액(2차)	기성 합계	잔 액
도급액	463,865,500	103,510,000	208,021,000 (44.8%)	311,531,000 (67.2%)	152,334,500 (32.8%)

아. 예산과목별 금액                                               (단위 : 원)

예산과목	기성금액(2차)	구분확인제 지출액 (기지출액)	금회(정산) 지출액	비고
합 계	208,021,000	10,604,000	197,417,000
급수공사,신설공사비 (급수공사)	61,270,000	8,164,000	53,106,000	노무비 (11.6)
구축물,시설비 및 부대비,시설비 (세척갱생관정비)	53,636,000	2,440,000	51,196,000	노무비 (11.6)
구축물,시설비 및 부대비,시설비 (송배수관정비)	39,325,000	-	39,325,000
배급수비,수선교체비,수도관교체비 (교체장애수전정비)	5,885,000	-	5,885,000
배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비 (수도계량기보호통 보온재교체)	8,085,000	-	8,085,000
배급수비,수선유지교체비,기타교체비 (가압장·배수지등시설물유지관리)	39,820,000	-	39,820,000

붙임 :  1. 기성보고서 1부.

2. 기성내역서(2차) 1부.

3. 구분확인제 지출현황 1부.   끝.

주무관	김재엽		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	12/19 代이만섭
협조자	주무관	류태현		주무관	김근용		주무관	김유진
행정관리팀장	김경식
시행	시설관리과-26777	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3995	/전송	3146-4039	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	대시민공개