투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	『자동차전용도로 일상유지보수공사』설계변경(2회-최종) 시행

1. 서부도로사업소 교량보수과-8077호(2014.12.19) 및 공사감독2처-21816호(2014.12.17)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리시에서 시행중인 『2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사(연간단가)-서부

나. 공사기간 : 2014.04.09. ~ 2015.02.28.

다. 도 급 자 : 다사랑건설(주)대표 박진구

라. 예산과목 : 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 자동차전용도로교량관리,

자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수공사, 시설비

마. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감액	비 고
총공사비		803,000,000	882,420,000	증)79,420,000
도급비	공급가액	730,000,000	802,200,000	증)72,200,000
	부 가 세	73,000,000	82,220,000	증)7,220,000
	계	803,000,000	882,420,000	증)79,420,000
관 급 비

바. 설계변경사유

1) 예산추가배정에 따른 물량 증가 및 신규공종 반영

2) 작업지시 현장여건에 따른 수량변경

붙임 : 1. 설계변경보고서 1부.

2. 제비율검증 1부.  끝.

주무관	우창원		교량보수과장	이수근		서부도로사업소장	12/19 김만수
협조자	주무관	백운경		주무관	이경남		관리단속과장	김영선
계약1팀장	김점선
시행	교량보수과-8082	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8355	/전송	300-8364	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개