문서번호	교량보수과-9081
결재일자	2014.12.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김승진		12/19 박병연
협 조
	주무관			김규춘

도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고

(12~15차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(12~15차)

자동차전용도로상 시설물 손상에 대하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년도 도로시설물일상유지보수공사(강서-전용도로)

나. 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 2015. 2. 28

다. 도 급 비 : 628,537,000원

라. 공사개요

신축이음보수 33m, 단면보수 834㎡, 표면보수 920㎡, 균열보수 등

마. 시 공 사 : 청구건설 대표 김진호

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

- 12차 작업지시『교량보수과-8200(2014.11.18)』

․ 작업기간 : 2014. 11. 19 ~ 12. 15

․ 작업완료 : 2014. 12. 5

- 13차 작업지시근거:『교량보수과-8291(2014.11.21)』

․ 작업기간 : 2014. 11. 24 ~ 12. 20

․ 작업완료 : 2014. 12. 15

- 14차 작업지시근거:『교량보수과-8330(2014.11.21)』

․ 작업기간 : 2014. 11. 24 ~ 12. 15

․ 작업완료 : 2014. 12. 5

- 15차 작업지시근거:『교량보수과-8541(2014.12.1)』

․ 작업기간 : 2014. 12. 2 ~ 12. 15

․ 작업완료 : 2014. 12. 15

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
12차	1	여의하류 입체교체로	B램프하부배수관설치 불량	배수관 설치	1개소	배수관 설치	1개소
	2		F램프하부배수관설치 불량	배수관 설치	1개소	배수관 설치	1개소
	3		B,F램프 하부도로	리프트 트럭	80.0hr	리프트 트럭	80.0hr
	4		B,F램프 하부도로	교통정리	80.0hr	교통정리	80.0hr
	5		B,F램프 하부도로	라바콘설치	200.0개	라바콘설치	200.0개
13차	1	경인철도횡단 지하차도	지하차도벽체 타일오염 (양방향)	타일보수	76.0㎡	타일보수	76.0㎡
	2		지하차도벽체 타일오염 (양방향)	타일철거	76.0㎡	타일철거	76.0㎡
	3		지하차도 벽체 누수 (양방향)	배면누수 보수	76.0㎡	배면누수 보수	76.0㎡
	4		상부슬라브 백태 (안양방향)	표면보수	20.0㎡	표면보수	19.4㎡
	5		상부슬라브 백태 (안양방향)	그라인딩	20.0㎡	그라인딩	19.4㎡
	6		상부슬라브 백태 (안양방향)	고압 물청소	20.0㎡	고압 물청소	19.4㎡
	7		슬라브 하부 유도배수로 누수 (안양방향)	기존 배수로 고재처리	105.46㎏	기존 배수로 고재처리	117.36㎏
	8		슬라브 하부 유도배수로 누수 (안양방향)	유도배수로 설치	26.6m	유도배수로 설치	29.6m
	9		교통정리	리프트 트럭	64.0hr	리프트 트럭	64.0hr
	10		지하차도벽체(성산방향)	강관틀비계	0㎡	강관틀비계	9.12㎡	추가지시
	11		지하차도벽체(양방향)	보호막설치	0㎡	보호막설치	76.0㎡	추가지시
	12		지하차도벽체(성산방향)	단면보수	0㎡	단면보수	36.4㎡	추가지시
	13		파쇄물 운반비 (콘크리트)	파쇄물 운반비	0.76㎥	파쇄물 운반비	0.76㎥
	14		파쇄물 상차 (현장~중간집하장)	파쇄물 상차	0.76㎥	파쇄물 상차	0.76㎥
14차	1	여의2 지하차도	지하차도내 전구간	차광막 설치	75.0경간	차광막 설치	75.0경간
	2		지하차도내 전구간	교통정리	16.0hr	교통정리	16.0hr
	3		지하차도내 전구간	라바콘설치	60.0개	라바콘설치	60.0개

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
15차	1	행주 입체교차로	교대(상,하류교) 및 방호책연석	균열보수	43.9m	균열보수	43.3m
	2		받침콘크리트(A1,2)	단면보수(20mm)	0.13㎡	단면보수(20mm)	0.13㎡
	3		받침콘크리트(A1,2)	단면보수(30mm)	0.86㎡	단면보수(30mm)	0.86㎡
	4		받침콘크리트(A1,2)	열화단면제거(20mm)	0.13㎡	열화단면제거(20mm)	0.13㎡
	5		받침콘크리트(A1,2)	열화단면제거(30mm)	0.86㎡	열화단면제거(30mm)	0.86㎡
	6		신축이음장치 주변	청소	3.17㎡	청소	3.17㎡
	7		받침 및 강박스	강교도장	12.15㎡	강교도장	12.15㎡
	8		자동차전용도로	소파응급복구	7개소	소파응급복구	7개소

다. 개략공사비 : 162,349천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시내용과 같이 이상없음 작업완료하여 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.