보    고    서

등록번호	시설관리과-34332

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김환	최명익	전결 12/19 나태산

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2014. 12. 19

복 명 자 : 지방시설서기보  김  환

공사현황

❍ 공 사 명 : 2014년 평창동 등 8개동 상수도공사

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
신설 46	*********	2014.11.28 ~ 12.09	2014.12.30	수요가의 연기요청으로 공사시행 까지 공사연기

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 수요가의 연기요청으로 공사 가능시까지 급수공사 작업연기 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.