함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	건설사업관리용역(CM)변경계약체결 [뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(CM)용역]

1. 시설안전부 고도정수반-6509(2014.12.19.)호와 관련입니다.

2. 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리 용역 총차분』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계약자 :************************

나. 용역개요 : ***************************************************************

다. 용역기간

- 총 차 분 : ’09.05.22.∼’14.12.25

- 6차분(금회) : ’14.01.02.∼’14.12.25

라. 변경내역 : 총차분 계약기간 변경 및 계약금액 증액

※ 6차분(금회분)은 변경사항 없음

(단위:천원)

구분	당초		변경		비고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
총차분	‘09.5.22∼’14.12.25	4,607,700	‘09.5.25∼’16.12.31	6,547,420	계약기간 : 연장 금액증감 : 증)1,939,720천원

마. 변경사유

- 시설공사 준공기한 연장에(‘15.1.6 → ’16.12.31)에 따른 건설사업관리자 투입계획 변경

바. 계약보증서 : 계약기간연장 및 금액증액에 따른 추가징구

- 추가보증금 : 총차분 계약금액 증액분 1,939,720,000원의 10%

- 보증기간  : 2009.5.25 ~ 2016.12.31

붙임 : 1. 공사변경계약서(초안) 1부.

2. 변경내역서 등 각 1부.  끝.

주무관	한희균		재무회계과장	조두업		요금관리부장	이종욱		상수도사업본부부본부장	12/19 정득모
협조자
시행	재무회계과-16533	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/	hhk011@seoul.go.kr	/	부분공개